2017년 수시 타당성 조사 위탁사업

2017년 수시 지방재정투자사업 타당성조사가 의뢰된 사업 중 외부위탁이 필요한 사업에 대하여 부문별로 위탁사업을 결정하여 조사사업을 수행하고자 하는 것임

2017년 제1차 타당성 조사 사업 현황

구분	시도	지자체	사업명	과업기간 (개월)
2017년 -수시	경기	◇◇	① (경기◇◇) ◇◇시 □□□□ 마리나항만 개발사업	6

※ 세부내용은 사업개요 참조

2. 타당성 조사 사업별 외부위탁 필요 부문 : 과업지시서 참조

의뢰 차수	사업명	모집 부문(천원)
		수요 및 편익 추정	기술적 검토 및 비용 추정	과업기간 (개월)
2017년 -수시	① (경기 ◇◇) ◇◇시 □□□□ 마리나항만 개발사업	2,500	2,000(기반: 항만시설)	4
			1,000(상부: 건축시설)

3. 사업개요

① (경기 ◇◇) ◇◇시 □□□□ 마리나항만 개발사업

구분	내용
사업추진 주체	◦경기도 ◇◇시
사업목적	◦러시아, 중국, 일본 등 주변국의 마리나산업 성장과 더불어 국내・외 마리나 수요 증가로 환황해의 거점형 마리나항만 필요성 대두 ◦해양레저 이용자 및 관광수요 증가에 따른 인프라시설 확충을 통해 마리나 활동인구 증가 및 해양레저 저변 확대 ◦본 사업을 통해 마리나산업 클러스터 및 국제 마리나 네트워크 구축, 국제 수준의 서비스 편의시설 제공으로 동북아 해양관광의 중심지 및 안산시의 신 성장동력 산업으로 육성하고자 함
사업 추진 근거	◦「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제8조 ◦거점형 마리나항만 개발사업 우선협상대상자 발표(15.07.27)
사업 내용	◦건설기간 : 2019년 ~ 2021년(3년) ◦운영기간 : 2022년 이후(30년) ◦규 모 : - 개발면적 : 144,700㎡(수역시설 : 74,400㎡, 육역시설 : 70,300㎡) - 계류시설 : 선박 300척(육상 150척, 해상 150척) - 육상시설 : 마리나선박 보관 및 지원시설, 서비스 및 편의시설(호텔, 상업시설, 마리나 빌리지)
총사업비	◦1,153억원(공사비 : 928억원, 용역비 : 55억원, 시설부대비 170억원)

[과업지시서]

『◇◇시 □□□□ 마리나항만 개발사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : ◇◇시 □□□□ 마리나항만 개발사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(수요 및 편익 추정 연구진)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (수요 및 편익 추정 연구진)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

③ 대안의 적정성 검토

④ 총사업비 추정

⑤ 운영비 및 유지관리비 추정

⑥ 재무성분석을 위한 비용 추정

⑦ 연차별 투입액 산정

□ 수요 추정(수요 및 편익 추정)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 관광 및 마리나 선박 수요추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요 및 편익 추정)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- CVM 설문조사를 위한 설문지 및 보기카드 작성 포함

② 편익 추정

- 마리나 시설 이용자 편익 및 관광시설 방문자 편익

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요 및 편익 추정 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2.5개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)