[붙임-2. 과업지시서]

『인천 남동구 00일반산업단지 조성사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 인천 남동구 00일반산업단지 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성분석을 위한 수입 및 비용 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비(상부건축물 반영, 경제성 분석용 및 재무성 분석용 포함) 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문지(1차, 2차), 보기카드 작성

③ 설문조사 방법 제시(지역배분, 업종배분 등)

④ 장래 수요 추정

⑤ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정(유효가동률 적용)

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『경기 지방도 □□□호선 화◇-운◇ 도로확포장공사 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 지방도 □□□호선 화◇-운◇ 도로확포장공사 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 대안별 총사업비 추정

⑤ 사전용역과의 사업비 비교분석

⑥ 대안별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

- 추정된 결과를 지방도 □□□호선 하◇◇-마◇ 및 월◇-광◇ 조사 사업과 비교 검토

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

④ 사업노선 교통량 변화 패턴 분석

⑤ 사전용역과의 수요 비교분석

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『경기 지방도 □□□호선 하◇◇-마◇ 도로확포장공사 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 지방도 □□□호선 하◇◇-마◇ 도로확포장공사 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요·편익 추정 및 경제성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

- 기존 실시설계결과가 존재할 경우 개략단가 검토가 아닌, 실시설계안의 물량 및 단가에 대한 검토

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

- 현황 교통량을 기반으로 네트웤 정산시와 장래 교통량 추정시 지방도 □□□호선 월◇~광◇ 사업과 연계하여 분석

- 또한 추정된 결과를 지방도 □□□선 화◇~운◇ 사업과 비교 검토

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

④ 사업노선 교통량 변화 패턴 분석

⑤ 사전용역과의 수요 비교분석

□ 편익 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『경기 지방도 □□□호선 월◇-광◇ 도로확포장공사 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 지방도 □□□호선 월◇-광◇ 도로확포장공사 타당성 조사

2. 용역기간 : 과제 착수일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

- 기존 실시설계결과가 존재할 경우 개략단가 검토가 아닌, 실시설계안의 물량 및 단가에 대한 검토

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

- 현황 교통량을 기반으로 네트웤 정산시와 장래 교통량 추정시 지방도 □□□호선 하◇◇~마◇ 사업과 연계하여 분석

- 또한 추정된 결과를 지방도 □□□선 화◇~운◇ 사업과 비교 검토

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

④ 사업노선 교통량 변화 패턴 분석

⑤ 사전용역과의 수요 비교분석

□ 편익 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

②  성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등 )

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등 )

『경기 수원 00수목원 조성사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 수원 00수목원 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문조사 방법 제시(설문대상, 범위 등)

③ 설문지 및 보기카드 작성 및 분석

④ 장래 수요 추정

⑤ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『경기 수원 000생태복합단지 조성사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 수원 000생태복합단지 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

③ 총사업비 추정

④ 상부건축물 비용 추정

⑤ 운영비 추정

⑥ 재무성분석을 위한 비용 추정

□ 수요 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요·편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『경기 수원 00시의회 청사 건립사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 경기 수원 00시의회 청사 건립사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 과제 착수일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 리모델링 대안의 검토 및 사업계획안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 총사업비 추정

⑤ 유지관리비 추정

⑥ 연차별 투입액 산정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

②  성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『충북 진천 00일반산업단지 조성사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 충북 진천 00일반산업단지 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 과제 착수일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문지(1차, 2차), 보기카드 작성

③ 설문조사 방법 제시(지역배분, 업종배분 등)

④ 장래 수요 추정

⑤ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정(유효가동률 적용)

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

②  성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『서울 00유수지 역세권 ◇◇◇◇청년주택 건립사업 사업계획 적정성검토』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 서울 00유수지 역세권 ◇◇◇◇청년주택 건립사업 사업계획 적정성검토

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

□ 사업계획의 적절성 검토(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업목적의 적절성 검토

② 시설계획의 적절성 검토

□ 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

③ 총사업비 추정

④ 운영비 및 유지관리비 산정

⑤ 연차별 투입액 산정

□ 수요 추정(수요 추정 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요 추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『서울 강동구 00자원순환센터 건립사업 사업계획 적정성검토』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 서울 강동구 00자원순환센터 건립사업 사업계획 적정성검토

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

◎ 복합시설(4개) 및 다수 지자체(7개) 발생량 처리시설임을 감안한 분석 필요

□ 기초자료 분석(수요 추정 연구진, 기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(수요 추정 연구진, 기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 사업계획 적정성검토의 주요 쟁점(수요 추정 연구진, 기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업 전반에 관한 쟁점

② 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

③ 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업목적의 적절성 검토

② 시설계획의 적절성 검토 등

□ 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 개요

② 총사업비 추정

③ 운영비 추정

④ 유지관리비 산정

⑤ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정(수요 추정 연구진)

① 수요 추정의 전제

② 수요 추정 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『강원 강릉 00폐기물처리시설 설치사업 사업계획 적정성검토』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 강원 강릉 00폐기물처리시설 설치사업 사업계획 적정성검토

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(수요 추정 연구진, 기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획(수요 추정 연구진, 기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 사업계획 적정성검토의 주요 쟁점(공통)

① 사업 전반에 관한 쟁점

② 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

③ 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업목적의 적절성 검토

② 시설계획의 적절성 검토 등

□ 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 개요

② 총사업비 추정

③ 운영비 추정

④ 유지관리비 산정

⑤ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정(수요 추정 연구진)

① 수요 추정의 전제

② 수요 추정 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

『전북 순창 00 한국전통발효문화산업 투자촉진지구(◇◇ 밸리) 조성사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : 전북 순창 00 한국전통발효문화산업 투자촉진지구(◇◇ 밸리) 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 과제 착수일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 (공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 재무성 분석 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 대안의 적정성 검토

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 사업별 총사업비 추정

⑤ 사업별 유지관리비 추정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문조사 방법 제시(설문대상, 범위 등)

③ 설문지 및 보기카드 작성 및 분석

④ 장래 수요 추정

⑤ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

②  성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)