2020년 2차 타당성조사 위탁사업

2020년 2차 지방재정투자사업 타당성조사가 의뢰된 사업 중 외부위탁이 필요한 사업에 대하여 부문별로 위탁사업을 결정하여 조사사업을 수행하고자 함

2020년 제2차 타당성조사 사업 현황

번호	분야	광역	기초	사업명	외부위탁 과업기간 (개월)
1	수송및교통	서울	본청	서울 GTX-A노선 광화문역 신설사업 타당성조사	8
2	공원	서울	본청	서울 서울숲 문화공원 조성사업 타당성조사	6
3	사회복지	서울	동작	동작구 사당동 공공복합시설 조성사업 타당성조사	6
4	문화및관광	서울	중랑	중랑구 면목유수지 문화·체육 복합센터 건립사업 타당성조사	6
5	전시	부산	본청	부산 벡스코 시설 확충사업 타당성조사	7
6	문화및관광	대구	달성군	달성군 화원공공복합청사 리뉴얼사업 타당성조사	6
7	청사	인천	본청	인천 루원복합청사 건립 사업계획 적정성검토	4
8	산업단지	대전	본청	대전 한남대학교 캠퍼스 혁신파크 선도사업 타당성조사	6
9	수송및교통	경기	남양주	남양주시 군도6호선(진접∼수동) 도로개설공사 타당성재조사	5
10	문화및관광	경기	시흥	시흥시 시민종합운동장 건립사업 타당성재조사	6
11	산업단지	경기	안산	안산시 한양대ERICA 캠퍼스혁신파크 HUB동 건립사업 타당성조사	6
12	수송및교통	강원	본청	강원 신월~여량간 도로확포장공사 타당성조사	5
13	수송및교통	강원	본청	강원 지방도 372호선 광덕터널 도로건설공사 타당성조사	5
14	수송및교통	강원	본청	강원 지방도 408호선 무이~생곡간 도로확포장공사 타당성조사	5
15	산업단지	강원	춘천	춘천시 도시첨단산업단지 조성사업 타당성조사	6
16	산업단지	충북	괴산	괴산군 메가폴리스 일반산업단지 조성사업 타당성조사	6
17	환경	충북	청주	청주시 사직운천 저류시설 비점오염저감시설 설치사업 타당성조사	6
18	문화및관광	전북	전주	전주시 독립영화의 집 건립사업 타당성재조사	6
19	수송및교통	전남	본청	전남 원화~효산간 지방도 확포장공사 타당성재조사	5
20	환경	경북	구미	구미시 이계천 통합·집중형 오염지류 개선사업 타당성조사	6
21	산업단지	경북	김천	김천시 자동차 서비스 복합단지 조성사업 타당성조사	6
22	문화및관광	경북	김천	김천시 제2스포츠타운 건립사업 타당성조사	6
23	산업	경남	창원	창원시 수소액화 실증 플랜트 구축사업 타당성조사	6

※ 조사사업별 사업 개요 : 붙임-1. 사업개요 참조

2. 2020년 2차 타당성조사 사업별 외부위탁 필요 부문

번호	분야	광역	기초	사업명	모집부문 금액 및 기간
					수요 및 편익 추정 (만원)	기술적 검토 및 비용 추정 (만원)	외부위탁 과업기간 (개월)
1	수송및교통	서울	본청	서울 GTX-A노선 광화문역 신설사업 타당성조사	4,000	3,000	8
2	공원	서울	본청	서울 서울숲 문화공원 조성사업 타당성조사	2,000	2,500	6
3	사회복지	서울	동작	동작구 사당동 공공복합시설 조성사업 타당성조사	2,500	2,500	6
4	문화및관광	서울	중랑	중랑구 면목유수지 문화·체육 복합센터 건립사업 타당성조사	2,500	2,500	6
5	전시	부산	본청	부산 벡스코 시설 확충사업 타당성조사	2,500	2,500	7
6	문화및관광	대구	달성군	달성군 화원공공복합청사 리뉴얼사업 타당성조사	2,500	2,500	6
7	청사	인천	본청	인천 루원복합청사 건립 사업계획 적정성검토	-	2,500	4
8	산업단지	대전	본청	대전 한남대학교 캠퍼스 혁신파크 선도사업 타당성조사	2,000	2,500	6
9	수송및교통	경기	남양주	남양주시 군도6호선(진접∼수동) 도로개설공사 타당성재조사	2,500	2,500	5
10	문화및관광	경기	시흥	시흥시 시민종합운동장 건립사업 타당성재조사	2,500	2,500	6
11	산업단지	경기	안산	안산시 한양대ERICA 캠퍼스혁신파크 HUB동 건립사업 타당성조사	2,000	2,500	6
12	수송및교통	강원	본청	강원 신월~여량간 도로확포장공사 타당성조사	2,500	2,500	5
13	수송및교통	강원	본청	강원 지방도 372호선 광덕터널 도로건설공사 타당성조사	2,500	2,500	5
14	수송및교통	강원	본청	강원 지방도 408호선 무이~생곡간 도로확포장공사 타당성조사	2,500	2,500	5
15	산업단지	강원	춘천	춘천시 도시첨단산업단지 조성사업 타당성조사	2,000	2,500	6
16	산업단지	충북	괴산	괴산군 메가폴리스 일반산업단지 조성사업 타당성조사	2,000	2,500	6
17	환경	충북	청주	청주시 사직운천 저류시설 비점오염저감시설 설치사업 타당성조사	2,500	2,500	6
18	문화및관광	전북	전주	전주시 독립영화의 집 건립사업 타당성재조사	2,500	2,500	6
19	수송및교통	전남	본청	전남 원화~효산간 지방도 확포장공사 타당성재조사	2,500	2,500	5
20	환경	경북	구미	구미시 이계천 통합·집중형 오염지류 개선사업 타당성조사	2,500 (생태하천)	2,500	6
					2,500 (비점오염)
21	산업단지	경북	김천	김천시 자동차 서비스 복합단지 조성사업 타당성조사	2,000	2,500	6
22	문화및관광	경북	김천	김천시 제2스포츠타운 건립사업 타당성조사	2,000	2,500	6
23	산업	경남	창원	창원시 수소액화 실증 플랜트 구축사업 타당성조사	2,500	2,500	6

※ 붙임-2. 과업지시서 참조

[붙임-1. 사업 개요]

1) (서울본청) 서울 GTX-A노선 광화문역 신설사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 서울특별시
사업목적	◦ 광화문 일대 친환경 대중교통 인프라 확충이 필요함에 따라 현재 추진 중인 GTX-A노선에 광화문역사 신설하고자 함
사업 추진 근거	◦ 제4차 국토종합계획 수정계획(2011～2020) ◦ 2030년 서울도시기본계획 수정계획(2010～2030) ◦ 서울시 10개년 도시철도망 구축계획(2014～2025) ◦ 대도시권광역교통기본계획(2007～2020) ◦ 제3차 대도시권 광역교통시행계획(2017～2020) ◦ 국가기간교통망계획 2차 수정계획(2001～2020) ◦ 제3차 국가철도망 구축계획(2016～2025) ◦ 제3차 수도권정비계획(2006～2020)
사업 내용	◦ 사업위치 : 서울특별시 중구 태평로 일원(세종대로 사거리 ～ 서울시청 북측) ◦ 사업기간 : 2022년 상반기~2026년 하반기 ◦ 사업규모 : 사업연장 335m, 역사시설 19,186㎡ - 역사 주요시설 : 지하 보행통로 1개층, 수직통로, 대합실, 승강장 2개층
총사업비	◦ 3,472억원(기투입 및 용역비 10억/공사비 2,733/보상비 98/용역비 316/예비비 315)

2) (서울본청) 서울 서울숲 문화공원 조성사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 서울특별시
사업목적	◦ 본 사업은 당초 2004년에 계획한 서울숲 기본계획에 따라 삼표산업 성수동 레미콘공장을 이전·철거하고 공원을 조성함으로써 미완성된 서울숲을 단계적으로 완성하고자 하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제43조, 제76조 ◦ 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」제53조 ◦ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제15조, 제16조의2)
사업 내용	◦ 사업위치 : 서울시 성동구 성수동1가 683 일대 ◦ 사업기간 : 2022년 07월 ～ 2023년 12월(1년 6개월) ◦ 사업규모 - 공원면적 28,804㎡, 복합문화공간 연면적 7,128.48㎡(지하1층/지상1층) - 복합문화공간 세부시설: 아카이브공간(880.12㎡), 교육문화공간(960.37㎡), 편의시설(1,471.24㎡)
총사업비	◦ 3,040억원(공사비 245/보상비 2,499/용역비 37/제세공과금 0.5/기타비용 8/예비비 251)

3) (서울동작) 동작구 사당동 공공복합시설 조성사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 서울특별시 동작구
사업목적	◦ 기존 공공시설의 노후화 및 공간부족, 분산 배치로 인한 주민 불편을 해소하고자 사당권에 분산된 보건·복지시설을 통합·확충하여 공공시설의 효율성을 제고하고자 함
사업 추진 근거	◦ 동작구 종합도시발전계획(2017) ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 7호, 시행령 제2조, 45조 3항 등
사업 내용	◦ 사업위치 : 서울시 동작구 사당동 318-99 외 8필지(舊 범진여객 부지) ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년(3년) ◦ 사업규모 : 부지면적 2,369㎡, 연면적 15,228㎡(지하 4층~ 지상 7층) - 세부시설 : 어르신종합복지관, 치매안심센터, 정신건강복지센터, 건강가정·다문화가족지원센터, 맘스하트카페, 키움센터, 평생학습관, 공영주차장 등
총사업비	◦ 680억원(공사비 344/보상비 211/용역비 41/시설부대비 25 /예비비 60)

4) (서울중랑) 중랑구 면목유수지 문화·체육 복합센터 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 서울 중랑구
사업목적	◦ 중랑구에 부족한 문화, 체육 인프라 확충을 위해 면목유수지에 문화·체육복합센터를 건립하여 구민의 편익 증진과 삶의 질 향상 도모
사업 추진 근거	◦ 「도시⋅군 계획시설의 결정⋅구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제119조 ◦ 「국민체육진흥법」 제3조, 제8조 ◦ 「체육시설의 설치⋅이용에 관한 법률」 제4조 ◦ 「청소년활동 진흥법」 제11조 ◦ 「영유아보육법」 제36조 ◦ 「도서관법」 제4조
사업 내용	◦ 사업위치 : 서울특별시 중랑구 면목동 168-2 면목유수지 내 ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2024년 ◦ 사업규모 - 홈플러스 2~3층 증축(연면적 8,936㎡) - 주요 도입시설: 구립도서관, 청소년문화의집, 육아종합지원센터, 구립체육시설(실내체육관) 등
총사업비	◦ 875억원(공사비 313/보상비 490/용역비 37/ 예비비 35)

5) (부산본청) 부산 벡스코 시설 확충사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 부산광역시
사업목적	◦ 본 사업은 부족한 전시면적 확보를 위해 벡스코 제2전시장 수평증축을 통해 전시컨벤션시설을 확충하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 「전시산업발전법」 제3조, 제11조, 제27조 등 ◦ 「국제회의산업 육성에 관한 법률」 제6조, 제8조, 제9조 등
사업 내용	◦ 사업위치 : 부산광역시 해운대구 APEC로 58(올림픽 공원 일대) ◦ 사업기간 : 2021년 4월 ～ 2023년 11월(2년 7개월) ◦ 사업규모 - 부지면적 31,614.9㎡, 연면적 89,193.69㎡(지하1층/지상3층) - 주요시설: 전시시설(22,637.90㎡), 회의시설(7,215.02㎡), 지상 공용시설(16,456.56㎡), 지하주차장, 기계실 및 저류조(42,925.21㎡)
총사업비	◦ 2,573억원(공사비 2,132/용역비 181/부대비 13/운영설비비 13/예비비 234) - 용지보상비 및 부가가치세 미포함

6) (대구달성군) 달성군 화원공공복합청사 리뉴얼사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 대구 달성군
사업목적	◦ 노후화된 읍사무소, 보건지소(건축물 정밀안전진단 D등급)를 복합청사로 신축하여 효율적인 행정서비스를 제공하기 위한 사업
사업 추진 근거	◦ 「공유재산 종합운영계획」(행정안전부)
사업 내용	◦ 사업위치 : 대구 달성군 화원읍 비슬로 2594 일원 ◦ 사업기간 : 2022년 4월 ~ 2024년 6월(2년2개월) ◦ 사업규모 - 대지면적 6,274㎡, 연면적 20,645㎡, 지하2층 지상7층 규모 - 주요 도입시설: 읍사무소, 도서관, 생활문화센터, 체육관, 돌봄센터, 평생학습관 등
총사업비	◦ 850억원(공사비 513/보상비 211/용역비 45/ 기타 81)

7) (인천본청) 인천 루원복합청사 건립 사업계획 적정성검토

구분	내용
사업추진 주체	◦ 인천광역시
사업목적	◦ 루원시티 도시개발사업 내 공공용지3 부지에 루원복합청사를 건립 후 인재개발원 등 인천시 9개 산하기관을 집적하여 업무의 효율성 강화 및 시민불편 해소
사업 추진 근거	◦ 「공유재산 및 물품관리법」 제94조의 3 ◦ 「인천광역시공유재산관리조례」 제47조 ◦ 「정부청사관리규정 시행규칙」 제2조
사업 내용	◦ 사업위치 : 인천광역시 서구 가정동 283-5번지 일원 ◦ 사업기간 : 2022~2024년 ◦ 사업규모 - 대지면적 15,503㎡, 연면적 43,395.23㎡, 지하2층 지상11층 규모 - 주요 도입시설: 인천시청 일부 부서, 인재개발원, 인천연구원 등 유관기관, 주민편의시설(근생시설)
총사업비	◦ 1,571억원(공사비 932/보상비 426/부대비 106/ 운영설비비 2/예비비 104)

8) (대전본청) 대전 한남대학교 캠퍼스 혁신파크 선도사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 대전광역시, 한국토지주택공사(LH), 한남대학교
사업목적	◦ 대학 내 유휴부지를 도시첨단 산업단지로 지정한 후, 단지 내 기업입주시설을 신축·지원하고 정부의 산·학·연 협력 및 기업역량 강화사업 등을 집중 지원하여 대학을 지역혁신성장의 거점으로 육성하고자 함
사업 추진 근거	◦ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 제7호, 제48조의 8 ◦ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조
사업 내용	◦ 사업위치 : 대전광역시 대덕구 한남로 70 일원(한남대학교 캠퍼스 내) ◦ 사업기간 : 2020년 12월 ~ 2022년 12월(2년) ◦ 사업규모 - 대지면적 21,000㎡, 연면적 22,300㎡(A동 12,908㎡, B동 9,392㎡) - 주요 도입시설: 대학 사용공간, 관리용 사무공간, 근린생활시설, 스타트업(예비/창업), BI/연구소, POST-BI/유관기관
총사업비	◦ 502.43억원 (공사비 424.88/보상비 0/용역비 43.50/ 시설부대비 및 운영설비비 34.05)

9) (경기남양주) 남양주시 군도6호선(진접∼수동) 도로개설공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 남양주시
사업목적	◦ 남양주시 순환도로망 3축의 단절구간인 남양주시 진접읍∼수동면 연결하는 도로 및 터널을 신설하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 도로법 제25조 및 동법 시행령 제24조
사업 내용	◦ 건설기간 : 2021년 3월 ～ 2026년 3월(5년) ◦ 운영기간 : 2026년 3월 ～ ◦ 사업규모 : L=3.31㎞ (터널 3.12㎞), B=10.0m, 왕복2차로
총사업비	◦ 1,142억원(공사비 927/보상비 61/용역비 53/부대비 2/ 예비비 99)

10) (경기시흥) 시흥시 시민종합운동장 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경기도 시흥시
사업목적	◦ 시흥시는 도민체전 개최를 위한 관람석을 보유한 육상경기장이 전무한 상황이며, 경기도 내 인구 50만 명 수준의 시․군 중 유일하게 도민체전 미개최 시․군임 ◦ 따라서 도민체전의 지역 균형적 개최를 도모하기 위한 인프라구축 및 경기도민과 시흥시민의 생활체육활동 참여 확대 방안 모색을 위함
사업 추진 근거	◦ 육시설의 설치이용에 관한 법률 제5조, 제6조 ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제43조 ◦ 시ㆍ군계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한 규칙 제99조
사업 내용	◦ 사업위치 : 경기도 시흥시 ◦ 사업기간 : 2023년 01월 ～ 2024년 12월(2년) ◦ 사업규모 - 부지면적 118,135㎡, 연면적 39,178㎡ - 종합운동장, 보조경기장, 체육시설(테니스장, 인라인장, 농구장, 풋살장), 기타시설(반려동물테마원, 펫까페 등), 주차시설 등
총사업비	◦ 1,124억원(공사비 815/보상비 207/용역비 54/ 기타 2/예비비 46)

11) (경기안산) 안산시 한양대ERICA 캠퍼스혁신파크 HUB동 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경기도 안산시, 한국토지주택공사(LH), 한양대학교 ERICA캠퍼스
사업목적	◦ 대학 내 유휴부지를 도시첨단 산업단지로 지정한 후, 단지 내 기업입주시설을 신축·지원하고 정부의 산·학·연 협력 및 기업역량 강화사업 등을 집중 지원하여 대학을 지역혁신성장의 거점으로 육성하고자 함
사업 추진 근거	◦ 「수도권정비계획법」 제8조 및 동법 시행령 제12조 제2항 제4호 ◦ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 제7호 ◦ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조
사업 내용	◦ 사업위치 : 안산시 상록구 사동 1271번지 일원(한양대ERICA캠퍼스 내) ◦ 사업기간 : 2020년 12월 ~ 2022년 6월(1년 6개월) ◦ 사업규모 - 대지면적 20,000㎡, 연면적 22,333㎡, 지하2층 지상18층 규모 - 주요 도입시설: 대학 사용공간, 관리용 사무공간, 근린생활시설, 스타트업(예비/창업), BI/연구소, POST-BI
총사업비	◦ 504.46억원 (공사비 426.91/보상비 0/용역비 43.50/ 시설부대비 및 운영설비비 34.05)

12) (강원본청) 강원 신월~여량간 도로확포장공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 강원도
사업목적	◦ 지방도415호선 중 정선군 정선읍 여탄리～여량면 고양리 구간은 도로가 협소하고 일부구간이 미개설되어 있어 교통 단절구간의 연결을 통하여 지역간 이동성 및 간선도로망과 접근성 향상 ◦ 협소하고 선형이 불량한 기존 도로의 기능개선 및 잠재된 교통사고 위험을 방지 ◦ 도로망이 부족한 정선군의 도로 확충을 통하여 통행시간 단축 및 주민소득 증대
사업 추진 근거	◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 ◦ 제1차 국가도로종합계획 ◦ 강원도 도로정비 기본계획
사업 내용	◦ 사업위치 : 정선군 정선읍 여탄리 ~ 여량면 고양리 ◦ 사업기간 : 2020년 ～ 2024년 (5년) ◦ 사업규모 - L=8.0㎞, B=9.5m, 왕복2차로(터널 1개소(1,650m), 교량 7개소(210m))
총사업비	◦ 777억원(공사비 698, 보상비 13, 용역비 65, 예비비 2)

13) (강원본청) 강원 지방도 372호선 광덕터널 도로건설공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 강원도
사업목적	◦ 지방도 372호선의 도로 선형 구조개선을 통하여 지역간 이동성, 접근성 향상을 도모하여 도로이용자의 안전성, 편의성 제고 ◦ 광덕터널 건설을 통한 지역경제 활성화 및 주변지역 주민의 정주여건 개선,
사업 추진 근거	◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 ◦ 제1차 국가도로종합계획 ◦ 강원도 도로정비 기본계획
사업 내용	◦ 사업위치 : 경기도 포천 이동면 도평리 ~ 강원도 화천 광덕리 ◦ 사업기간 : 2023년 3월 ～ 2027년 12월(5년) ◦ 사업규모 - L=4.7㎞, B=10.5m, 왕복2차로(터널 1개소(3,805m), 교량 6개소(L=25m, L=30m, L=30m))
총사업비	◦ 1,435억원(공사비 1,304, 보상비 14, 용역비 72, 예비비 45)

14) (강원본청) 강원 지방도 408호선 무이~생곡간 도로확포장공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 강원도
사업목적	◦ 무이 지구에서 생곡지구를 연결하는 2차로 지방도 건설 사업으로 터널 2개소 및 교량 6개소를 포함한 도로 건설 사업임 ◦ 지역의 숙원사업으로서 지방도 408호선의 기능을 개선하고, 지역주민의 삶의 질 향상 및 지역경제의 균형적인 발전을 도모하기 위한 사업
사업 추진 근거	◦ 도로법
사업 내용	◦ 사업위치 : 강원도 홍천군 서석면 생곡리∼평창군 봉평면 무이리 ◦ 사업기간 : 2027년 1월 ～ 2032년 12월(5년) ◦ 사업규모 - L=8.3㎞, B=10.0m, 왕복2차로(터널 2개소 및 교량 6개소 포함)
총사업비	◦ 2,075억원(공사비 1,774, 보상비 23, 용역비 96, 시설부대비 4, 예비비 177)

15) (강원춘천) 춘천시 도시첨단산업단지 조성사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 강원도 춘천시, 한국토지주택공사(LH), 강원대학교
사업목적	◦ 대학 내 유휴부지를 도시첨단 산업단지로 지정한 후, 단지 내 기업입주시설을 신축·지원하고 정부의 산·학·연 협력 및 기업역량 강화사업 등을 집중 지원하여 대학을 지역혁신성장의 거점으로 육성하고자 함
사업 추진 근거	◦ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 제7호, 제48조의 8 ◦ 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조
사업 내용	◦ 사업위치 : 강원도 춘천시 효자동 192-1 일원(강원대학교 캠퍼스 내) ◦ 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2022년 12월(3년) ◦ 사업규모 - 대지면적 66,500㎡, 연면적 22,300㎡(지하1층/지상10층) - 주요 도입시설: 대학 사용공간, 관리용 사무공간, 근린생활시설, 스타트업(예비/창업), BI/연구소, POST-BI/유관기관
총사업비	◦ 517.25억원 (공사비 438.70/보상비 0/용역비 43.50/ 시설부대비 및 운영설비비 35.05)

16) (충북괴산) 괴산군 메가폴리스 일반산업단지 조성사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ (가칭) 괴산메가폴리스산업단지주식회사(SPC, 괴산군 포함)
사업목적	◦ 충청북도 전략산업 및 저탄소 녹색산업, 신재생에너지 등의 미래성장 유치에 따른 집적효과 극대화 ◦ 산업단지 조성으로 신성장 동력 및 일자리 창출을 통한 괴산군 경제 활성화 유도
사업 추진 근거	◦ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 ◦ 「산업단지 인ㆍ허가 절차 간소화를 위한 특례법」
사업 내용	◦ 사업위치 : 충북 괴산군 사리면 일원 ◦ 사업기간 : 2023년 1월 ～ 2026년 12월 (4년) ◦ 사업규모 : 부지면적 1,775,937㎡(54만평)
총사업비	◦ 3,856억원(공사비 1,897/보상비 902/용역비 및 기타 1,057)

17) (충북청주) 청주시 사직운천 저류시설 비점오염저감시설 설치사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 충청북도 청주시
사업목적	◦ 효율적인 비점오염원 관리를 위해 비점오염저감시설을 설치로 금강수계 수질보전 및 지역환경을 개선하고자 하는 사업
사업 추진 근거	◦ 「물환경보전법」 제3조 ◦ 「비점오염저감 국고보조사업 추진지침」(환경부)
사업 내용	◦ 사업위치 : 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 1번지 ◦ 사업기간 : 2021년 9월 ~ 2022년 12월(1년 4개월) ◦ 사업규모 - 부지면적 10,000㎡, 시설용량 38,000㎥, 이송관로 5.2km
총사업비	◦ 518억원(공사비 419/보상비 1/용역비 50/기타 1/예비비 47)

18) (전북전주) 전주시 독립영화의 집 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 전주시
사업목적	◦ 다양한 영화 창작의 근간이자 고부가가치 산업인 영상산업과 문화의 기반인 독립·예술영화와 지역영화의 선순환 생태계(제작-교육-배급·상영-향유) 구축, 문화의 지방분권 정책 동향에 따라 영화진흥위원회의 독립·예술영화와 지역영화 진흥 정책의 지역 전달체계(지역영화진흥위원회) 역할 수행
사업 추진 근거	◦ 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제38조 ◦ 「문화산업진흥기본법」 제10조, 제12조, 제16조
사업 내용	◦ 사업위치 : 전주시 완산구 전주객사2길 48(고사동) ◦ 사업기간 : 2021년 1월 ～ 2023년 12월(3년) ◦ 사업규모 - 부지면적: 15,150.4㎡ - 영상문화관 신축(연면적 1,837.50㎡, 지하1층~지상4층) - 영상산업관 리모델링(연면적 2099.00㎡, 지상3층) - 주요 도입시설: 공공영화관 3개관, 라키비움(도서관+전시체험실+아카이브), 후반영상제작시설, 다목적 광장, 주차장
총사업비	◦ 628억원(공사비 262/보상비 267/용역비 18/시설부대비 0.6/운영설비비 23/예비비 57)

19) (전남본청) 전남 원화~효산간 지방도 확포장공사

구분	내용
사업추진 주체	◦ 전라남도
사업목적	◦ 지방도 817호선 구간중 화순군 도곡면 원화리 ∼ 효산리 구간 2차로 도로를 4차로 확·포장하여 도곡온천과 화순고인돌 유적지를 찾는 관광객의 교통 편의를 증진하고, ◦ 지방도 817호선(간선도로) 천암리 마을을 우회토록 계획하여 교통사고 방지 및 생활환경 개선으로 지역개발 촉진
사업 추진 근거	◦ ｢도로법｣ 제6조, 제31조
사업 내용	◦ 사업위치 : 화순군 도곡면 원화리 ∼ 도곡면 효산리 ◦ 사업기간 : 2021년 1월 ～ 2026년 1월(5년) ◦ 사업규모 - 도로확포장 L= 4.2㎞, B= 19.5∼23.5m(4차로) - 교량 3개소 L= 530m - 유출입시설 : 평면교차로 7개소
총사업비	◦ 927억원(공사비 505/보상비 393/용역비 28/기타 1)

20) (경북구미) 구미시 이계천 통합·집중형 오염지류 개선사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 구미시
사업목적	◦ 구미시 관내 복개구간의 오염된 퇴적토 준설, 주거 밀집지역의 오접합 하수관로개선, 비점오염원의 처리대책 등을 통해 이·치수 중심의 하천정비로 훼손된 도심하천을 복원과 수질개선과 물순환체계 구축 ◦ 이를 통해 건강한 생태하천으로 복원, 생태계의 건강성 회복으로 환경, 자연, 문화가 어우러진 물 순환형 수변도시로 발전 및 주변 상권의 활성화 도모
사업 추진 근거	◦ 「물환경보전법」 제3조(책무), 제27조의2(복원계획 수립), 「수질환경보전법」, 「도시개발법」 등
사업 내용	◦ 사업위치 : 경북 구미시 인동동~진미동 일대 이계천 복개구간 ◦ 사업기간 : 2021년 ～ 2025년(5년) ◦ 사업규모 : 생태하천 복원사업, 하수관로 개선사업, 비점오염 처리사업
총사업비	◦ 1,415억원(공사비 1,166/보상비 333/용역비 및 기타 246)

21) (경북김천) 김천시 자동차 서비스 복합단지 조성사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 경상북도 김천시
사업목적	◦ 튜닝카 성능·안전시험센터 유치를 계기로 관련 산업의 집적을 위한 자동차서비스복합단지 조성하고자 하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 「자동차 관리법」제68조의9 , 「자동차관리법 시행령」제13조의8
사업 내용	◦ 사업위치 : 경상북도 김천시 어모면 다남리 486-2번지 일원 ◦ 사업기간 : 2021년 12월 ~ 2025년 1월(3년 2개월) ◦ 사업규모 : 부지면적 406,637㎡ - 산업시설용지 261,610㎡, 지원시설용지 4,251㎡, 공공시설용지 140,776㎡
총사업비	◦ 548억원(공사비 225/보상비 210/용역비 48/시설부대비 34/예비비 31)

22) (경북 김천) 김천시 제2스포츠타운 건립사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 김천시
사업목적	◦ 기존 김천 종합 스포츠타운과 연계하여 엘리트 체육 육성 및 스포츠 특화도시로서의 위상을 제고하기 위해 추진하는 사업임
사업 추진 근거	◦ 국민체육진흥법 제3조, 제8조, 제13조 ◦ 체육시설의 설치․이용에 관한 법률 제4조, 제5조 제6조, 제8조 ◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조, 제88조
사업 내용	◦ 건설기간 : 2022년 ～ 2028년 (1단계: 2022년～2025년, 2단계: 2025년~ 2028년) ※ 공사구간을 1,2단계 구분하여 단계적으로 추진 예정 ◦ 운영기간 : 2025년 5월 ～ (1단계: 2025년6월 ～, 2단계: 2028년~ ) ◦ 사업규모 : 부지면적: 186,229㎡, 시설연면적: 19,000㎡ 실내체육관, 축구장 4개소, 이용자편의시설, 종합지원센터, 주차장 2개소
총사업비	◦ 1,270억원(공사비 604/보상비 628/용역비 37/부대비 1)

23) (경남창원) 창원시 수소액화 실증 플랜트 구축사업

구분	내용
사업추진 주체	◦ 하이창원㈜(SPC) ※ 창원산업진흥원/두산중공업 출자법인
사업목적	◦ 창원시는 침체된 조선, 기계산업을 대체할 신성장 동력산업 추진을 위해 수소 관련 산업을 육성하고자 수소산업 특화단지(국내최초 수소액화 사업) 조성을 계획함
사업 추진 근거	◦ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 ◦ 「신산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」
사업 내용	◦ 사업위치 : 경남 창원시 성산구 두산볼보로 22(창원국가산업단지 내 두산중공업 부지) ◦ 사업기간 : 2020년 7월 ~ 2022년 9월 (2년 3개월) ◦ 사업규모 - 부지면적 23,100㎡(수소생산 및 액화플랜트, 생산용량: 5ton/day) - 주요 도입시설: 제어동 등 주요 부대시설, 설비운전을 위한 utility 설비
총사업비	◦ 977.51억원 (EPC 금액 740, 부대비 125.35, 영업준비금 34.01, 건설이자 27.87, 부채상환적립금 50.27)