2021년 3차 타당성조사 위탁사업 결정

2021년 3차 지방재정투자사업 타당성조사가 의뢰된 사업 중 외부위탁이 필요한 사업에 대하여 부문별로 위탁사업을 결정하여 조사사업을 수행하고자함

2021년 3차 타당성조사 사업 위탁현황

번호	분야	광역	기초	사업명	모집부문 금액 및 기간
					수요 및 편익 추정 (만원)	기술적 검토 및 비용 추정 (만원)	외부위탁 과업기간 (개월)
1	청사	부산	본청	서부산 행정복합타운 조성사업	2,500	2,500	5
2	지역개발	인천	본청	인천 송도국제도시 워터프런트 2단계 조성사업	2,500 (수질/친수)	3,000	9
					2,500 (홍수피해저감)
					1,200 (상업)
3	청사	인천	미추홀구	인천 미추홀구 신청사 건립사업	3,000 (주거/상업)	3,000	8
					2,000 (문화시설)
4	사회복지	경기	평택시	경기 평택시 북부노인복지시설 건립사업	2,500	2,500	6
5	환경	경기	용인시	경기 용인환경센터 2,3호기대체 자원회수시설 설치사업	3,500		4
6	교육	충남	본청	대전‧세종‧충남 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업	2,500	-	6
7	지역개발	충남	서산시	충남 천안 용곡지구 도시개발사업	2,500	2,500	5

※ 조사사업별 사업 개요 : 붙임-1. 사업개요 참조

01. [붙임-2. 과업지시서]

『(부산본청) 서부산 행정복합타운 조성사업 타당성조사』외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (부산본청) 서부산 행정복합타운 조성사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 5개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련 계획 검토

③ 기타 관련 계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 사업 전반에 관한 쟁점

② 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

③ 시설 적정 규모 검토 관련 쟁점(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

④ 경제성분석을 위한 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 현 청사의 리모델링(수직, 수평 증축) 가능성 검토

② 사업목적 및 시설계획의 적절성 검토

- 청사가 포함된 복합 시설인 측면을 고려하여 현황 및 법적기준 검토 필요

□ 적정 규모 검토(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 적정 규모 검토의 전제

② 적정 규모 검토 결과

□ 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 비용 추정 기준 설정

② 총사업비 추정

③ 운영비 추정

④ 유지관리비 산정

⑤ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정(수요･편익 추정 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- 업무 및 상업시설 수요 추정을 위한 분석 방법 검토

- 업무 및 상업시설 관련 부동산 시장 동향(가격분석 등 포함)

- 본 시설 입지여건 분석

② 사업계획을 고려한 장래 수요 추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- 업무 및 상업시설 편익 추정을 분석 방법 검토

- 사업대상지 주변에 대한 환경 분석 및 시설별 분양가/임대료 현황

- 시설별 유사사례 검토 및 사업대상지 적정 분양가/임대료 추정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 4개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

02. [붙임-2. 과업지시서]

『(인천본청) 인천 송도국제도시 워터프런트 2단계 조성사업 타당성조사』외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (인천본청) 인천 송도국제도시 워터프런트 2단계 조성사업 타당성조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 9개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 사업 전반에 관한 쟁점

② 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

③ 수질/친수 수요 및 편익 추정 관련 쟁점(수질/친수 수요 및 경제성 분석 연구진)

④ 홍수피해저감 효과 및 편익 추정 관련 쟁점(홍수피해저감 효과 및 경제성 분석 연구진)

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

② 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

③ 사업계획 및 대안의 적정성 검토

④ 갑문관련 기술 및 유사사례 검토

⑤ 총사업비 추정(기반시설/상부건축물)

⑥ 운영비 추정

⑦ 재무성분석을 위한 비용 추정

⑧ 유지관리비 추정(기반시설/상부건축물)

⑨ 연차별 투입액 산정

□ 홍수피해저감 효과 분석(홍수피해저감 효과 및 경제성 분석 연구진)

① 기본계획 홍수피해저감 효과 분석방법론 검토

② 홍수피해저감 효과 분석 시나리오 설정

③ 홍수피해저감 효과 분석

④ 장래 자산가치 평가 및 홍수피해액 추정

□ 친수 수요 추정(수질/친수 수요 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 장래 수요추정(친수 공간 방문 수요추정 포함)

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수질/친수 수요 및 경제성 분석 연구진, 홍수피해저감 효과 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- CVM 설문조사를 위한 설문지 및 보기카드 작성 포함

- 유사시설 조사를 통한 객단가 및 이용 수요 추정 포함

② 편익 추정

- 수질 개선에 대한 편익, 친수공간 조성에 관한 편익 등

- 홍수피해저감 효과에 관한 편익 추정 등

※ 수질개선 효과분석 결과검토는 별도 연구진이 수행 예정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수질/친수 수요 및 경제성 분석 연구진, 홍수피해저감 효과 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 4개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

03. [붙임-2. 과업지시서]

『(인천 미추홀구) 인천 미추홀구 신청사 건립사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (인천 미추홀구) 인천 미추홀구 신청사 건립사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 8개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(기술적 검토 및 비용 추정 연구진 및 주거 상업 연구진)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(주거 상업 연구진, 문화시설 연구진, 청사 적정성 검토 연구진)

① 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(주거 상업 연구진, 문화시설 연구진, 청사 적정성 검토 연구진)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

- 청사 적정 규모 검토 관련 쟁점 포함

② 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

- 현 청사 리모델링 가능성 및 정밀안전진단 결과 검토

② 유사사례 시설규모 및 비용 사례 비교 검토

- 인천 미추홀구 청사 건립 조례와 타 지방자치단체의 청사 건립 조례 비교 포함

③ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

④ 총사업비 추정

- 경제성 분석용 비용 추정 시 상부건축물 비용 추정 포함

⑤ 운영비 및 유지관리비 추정(부지 및 상부건축물)

⑥ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정(주거 및 상업 수요･편익 추정)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- 주거 및 상업 용지 부문

② 장래 수요 추정

- 상업시설에 대한 부동산 시장 및 상권 분석, 상업시설 수요 면적 검토

- 주거 수요 추정 모형 설정 및 장래 수요 추정

□ 수요 추정(문화시설 수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- 청소년수련관, 문화집회시설 등 각 시설별 분석방법론 설정

② 설문조사 방법 제시(설문대상, 범위 등)

③ 설문지 및 보기카드 작성 및 분석

※ 본 사업은 설문조사를 실시(별도 사업비)할 예정으로, 설문조사의 범위, 대상, 방법, 설문지 등에 대해 LIMAC과 수요팀 간의 협의 필요

④ 장래 수요 추정(시설별)

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진 공통)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

- 주거 및 상업시설: 상권 수요 분석에 따른 임대료 편익 추정, 대인 및 시나리오별 편익 추정 등

- 문화시설: 청소년수련관 및 문화집회시설 등 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 4개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

04. [붙임-2. 과업지시서]

『(경기 평택) 경기 평택시 북부노인복지시설 건립사업 타당성 조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (경기 평택) 경기 평택시 북부노인복지시설 건립사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 6개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

- 기존 복지시설현황 및 설치 관련 법률⋅규정 검토 등

- 본 사업 내 세부 복지시설별 설계 기준에 대한 법적 검토 등

② 유사사례 시설규모 및 비용 사례 비교 검토

③ 대안 설정 및 대안의 적정성 검토

④ 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

⑤ 총사업비 추정

⑥ 운영비 추정

⑦ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문조사 방법 제시(설문대상, 범위 등)

③ 설문지 및 보기카드 작성 및 분석

※ 장애인 본인 및 보호자를 대상으로 설문조사를 실시(별도 사업비)할 예정임에 따라 설문조사의 범위, 대상, 방법, 설문지 등에 대해 LIMAC과 수요팀간의 협업 필요

※ 필요에 따라 FGI 수행시 지원

④ 장래 수요 추정

※ 노인복지관, 노인대학, 생활문화센터 등 시설별 수요추정 필요

⑤ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

※ 노인복지관, 노인대학, 생활문화센터 등 시설별 편익추정 필요

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

05. [붙임-2. 과업지시서]

『(경기 용인시) 경기 용인환경센터 2,3호기대체 자원회수시설 설치사업 사업계획 적정성 검토』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (경기 용인시) 경기 용인환경센터 2,3호기대체 자원회수시설 설치사업
사업계획 적정성 검토

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 4개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 과거 폐기물 발생량 및 처리현황 조사

④ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사

① 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 사업계획 적정성검토의 주요 쟁점

① 사업 전반에 관한 쟁점

② 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

③ 수요 추정 관련 쟁점

□ 기술적 검토

① 사업목적의 적절성 검토

② 시설계획의 적절성 검토 등

□ 비용 추정

① 비용 추정 기준 설정

② 총사업비 추정

③ 운영비 추정

④ 운영수입 추정

⑤ 연차별 투입액 산정 등

□ 수요 추정 및 시설용량 검토

① 폐기물 처리구역 확정

② 조성법 등 장래 인구 추정

③ 폐기물 원단위 추정

④ 월변동계수 검토

⑤ 장래 폐기물 발생량 추정 및 시설용량 검토

4. 과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 2개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

06. [붙임-2. 과업지시서]

『(충남 본청) 대전‧세종‧충남 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 타당성조사』 외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (충남 본청) 대전‧세종‧충남 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 타당성조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 6개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(공통)

① 비용 검토 관련 쟁점

② 수요 추정 관련 쟁점(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

③ 기타 쟁점

□ 비용 검토

① 사업계획의 검토

② 비용 검토를 위한 기본 가정 검토

④ 사업비 원안 검토

□ 수요·편익 추정(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 설문조사 방법 제시(설문대상, 범위 등)

③ 설문지 및 보기카드 작성 및 분석

※ 본 사업은 설문조사를 실시(별도 사업비)할 예정으로, 설문조사의 범위, 대상, 방법, 설문지 등에 대해 LIMAC과 수요팀간의 협업 필요

④ 기본자료 및 분석방법론 설정

⑤ 가치창출 편익 추정

⑥ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

◦ 시나리오별 분석

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 3개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음

07. [붙임-2. 과업지시서]

『(충남천안) 충남 천안 용곡지구 도시개발사업 타당성 조사』외주 과업지시서

1. 사 업 명 : (충남천안) 충남 천안 용곡지구 도시개발사업 타당성 조사

2. 용역기간 : 계약 체결일로부터 5개월간

3. 과업내용

◎ 사용할 기본 자료 및 분석 방법론은 LIMAC 연구진과 협의하여 타당성 조사를 수행하는 것을 원칙으로 함

□ 기초자료 분석(공통)

① 일반현황 검토

② 사회경제적 환경 분석

③ 국내·외 유사사례 검토

□ 관련 계획 조사(공통)

① 국가 상위계획 검토

② 지역 관련계획 검토

③ 기타 관련계획 검토

□ 타당성 조사의 주요 쟁점(개별연구진)

① 기술적 검토 및 비용 추정 관련 쟁점

② 수요 및 편익 추정 관련 쟁점

③ 기타 쟁점

□ 기술적 검토 및 비용 추정(기술적 검토 및 비용 추정 연구진)

① 사업계획의 검토 및 설계기준 설정

- 「도시개발법」 기준 검토 등

② 비용 추정을 위한 기본 가정 검토

③ 대안의 적정성 검토

④ 총사업비 추정(경제성 및 재무성분석용 비용추정 포함)

- 경제성 분석용 비용추정 시 상부건축물 비용 추정 포함

⑤ 사전용역과의 비교 및 검토

⑥ 운영비 및 유지관리비 산정(부지 및 상부건축물)

⑦ 연차별 투입계획 및 비율 산정

□ 수요 추정(수요･편익 추정 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

- 주거 및 상업 용지 부문

② 사업계획을 고려한 장래 수요 추정

③ 시나리오에 따른 수요 추정 검토

□ 편익 추정(수요･편익 추정 연구진)

① 기본자료 및 분석방법론 설정

② 편익 추정

③ 시나리오에 따른 편익 추정

□ 경제성 분석(수요･편익 추정 및 경제성 분석 연구진)

① 기본가정 및 분석범위 설정

② 경제성 분석 결과

③ 민감도 분석 결과

4.  과업수행 조건

① 보고

◦ 착수보고 : 계약일로부터 10일 이내에 연구내용별 수행방법, 추진일정 등을 보고

※ 상기 과업내용은 예시적인 사항으로 변동 가능하며, 착수보고 시 세부 과업내용 확정

◦ 중간보고 : 계약체결일로부터 3개월 이내

◦ 최종보고 : 과업종료 15일전

② 성과품(보고서 파일)

◦ 중간보고서(본보고서, 전산파일 등)

◦ 최종보고서(본보고서, 기타 전산파일 등)

5. 보안 및 기타사항

◦ 본 용역 수행과정에서 생산된 보고서 및 결과물의 저작권은 발주기관이 소유함

◦ 용역수행 기관은 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역에 관한 일체의 사항을 외부에 누설해서는 아니 됨

- 용역수행 기관의 보안유지 미 이행으로 문제가 발생할 경우, 이에 대하여 전적으로 용역수행 기관이 책임을 짐

◦ 과업 진행 중 또는 완료 후 동 용역과 관련한 내용에 대하여 용역수행 기관이 대외발표(임의공개, 세미나, 논문 등)를 할 경우, 용역수행 기관은 발주기관과 협의하여야 함

◦ 사업추진 주체의 사정 등으로 인하여 과업이 중단될 수도 있으며, 이 경우 위탁예정금액은 발주기관과 협의하여 일부만 지급될 수도 있음